- 1 - 
Дополнительное соглашение № 2 
к договору № РТС231А170003-Д от «29» марта 2017 г. 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Белгородская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, дом 1 

г. Губкин 

«15» сентября 2017 г. 

«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области», в лице исполнительного директора 
Белоковаленко Леонида Игоревича, действующего на основании У става, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с 
ограниченной ответственностью «Ремотделстрой», в лице директора 
Шарапонова Романа Васильевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2016 NQ 615 «О порядке привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и иных правовых 
актов Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное 
соглашение (далее - Соглашение) к Договору NQ РТС231А170003-Д от 29 
марта 2017 года на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Белгородская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, дом 1, (далее - 
Договор) о нижеследующем: 
1. В связи с изменением объема фактически выполненных работ 
изменить пункт 3.1 в следующей редакции: 
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 10889952,78/ 
(десять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот 
пятьдесят два) рубля 78 копеек, в том числе НДС 1 661 179 (один миллион 
шестьсот шестьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) рублей 24 копейки. 
Стоимость по видам работ составляет: 
1. ремонт внутридомовых инженерных сетей - 2 802 728 (два миллиона 
восемьсот две тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 78 ,;Копеек, в том 
числе НДС 427 534 (четыреста двадцать семь тысяч пятьсот тридцать четыре) 
рубля 90 копеек; 
2. установка коллективных/ПУ и УУ - 948 044 (девятьсот сорок восемь 
тысяч сорок четыре) рубля 58J<Qпеек, в том числе НДС 144 616 (сто сорок 
четыре тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 97 копеек; 

I 

- 2 - 
3. ремонт фасада - 1 820 214 (один миллион восемьсот двадцать тысяч 
двести четырнадцать) рублей 94 копейки, в том числе НДС 2717 659 (двести 
семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 91 копейка; 
4. утепление фасада - 4024381 (четыре миллиона двадцать четыре 
тысячи триста восемьдесят один) рубль 03 опейки, в том числе НДС 613 
888 (шестьсот тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 63 
копеек; 
5. ремонт крыши - 1 294 583 (один миллион двести девяносто четыре 
тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 45 опеек, в том числе НДС 197478 
(сто девяносто семь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 83 копейки. 

2. Иные условия Договора остаются прежними. 
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью договора NQ РТС231А170003-Д от 29 марта 2017 года на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. 
Комсомольская, дом 1, составлено в двух экземплярах (1 экземпляра - для 
000 «Ремотделстрой», 1 экземпляр для «Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области») и имеет 
одинаковую юридическую силу. 

Реквизиты сторон 
Заказчик: «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области» 
Местонахождение: 308000, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 85-А 
Реквизиты: ИННIКIШ 3123231839/312301001 р/с 40703810307000000256 
в Белгородском отделении NQ 8592 ОАО «Сбербанк России» БИК 041403633 
К/С 30101810100000000633 ОГРН 1027100132195 

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремотделстрой» 

Местонахождение: 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. 
Комсомольская, д. 2 А 

Реквизиты: инн 3127999981IКШI 312701001, ОГРН 1063127012992, 
р/с 4070281030 20001391 Белгородское ОСБ NQ8592 г. Белгород 
К/С 301018101 000000633, БИК 041403633 
1) 7-68-19 ПТО, 5-51-87 (бухгалтерия) 

Подрядчик: